설악대교 정밀점검용역

과   업   지   시   서

	속 초 시

목      차

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 개요

4. 과업의 사전승인

5. 과업수행 및 공정보고

6. 계약상대자의 책임한계

7. 관련기관 협의 및 인․허가

8. 보안 및 비밀유지

9. 과업수행자의 교체 및 책임기술자 자격

10. 과업 수행시 준수사항

11. 안전점검 실시결과 평가

제2장 과업수행

1. 계획수립

2. 장비의 선정

3. 안전관리

4. 과업의 구분

5. 사전조사

6. 현장조사

7. 재료시험

8. 중대한 위험이 예견되는 결함

9. 시설물의 상태평가 방법

10. 시설물의 안전등급 지정

11. 보수·보강 방법

제3장 성과품 제출

1. 보고서 작성 방법

2. 성과품 제출 목록

제4장 예정공정표

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『설악대교 정밀점검용역』이라 하고 속초시를 “발주기관”, 수급자를 “계약상대자”로 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 교량에 대한 정밀점검 용역으로서, 시설물의 물리적, 기능적 결함을 조사하고, 구조적 안전성 및 손상 상태를 점검하여, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취함으로써 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 개요

가. 시설물의 개요

구분	구조형식	규 모		설계하중	준공년도	비 고
		연 장(m)	폭(m)
설악대교	Steel Box Girder+ Steel Arch	410	17.80~32.10m	DB-24/DL-24	2003년 10월 30일	정밀점검용역

나. 과업내용

(1) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토교통부고시)에 따라 점검용역 실시

- 현장조사 및 시험

- 상태평가

- 안전성평가

- 종합평가

- 보수․ 보강 방법

- 보고서 작성

(2) 기타 발주청이 필요하다고 요구하는 사항

다. 과업기간

(1) 본 과업은 착수일로부터 2개월(60일)로 한다.

(2) 과업은 공정계획에 따라 차질없이 수행하여야하며, 다음의 한하여 “발주기관”의 승인을 얻어 과업기간을 변경(조정) 할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때.

②“발주기관”의 계획변경 등 방침에 따라 과업의 중단 또는 내용의 현저한 변경이나 증, 감이 있을 때.

③ 과업수행 계획단계에서 예상치 못했던 일로 변경이 불가피한 경우.

4. 과업의 사전승인

가. “계약상대자”는 다음 사항을 사전에 “발주기관”과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

(2) 관련기관과의 협의사항

(3) 기타 감독원의 지시나 “계약상대자” 의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

나. 과업수행중 “발주기관” 계획 또는 방침변경등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는 “발주기관”은 “계약상대자”와 사전 협의․결정하며, 결정사항은 “계약상대자”가 지체 없이 이행하여야 한다.

5. 과업수행 및 공정관리

가. 과업수행 방법

(1) “계약상대자”는「시설물의 안전관리에 관한 특별법」(이하“시특법”) 제7조, 제10조 및 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(2013.4.26)에 의거 본 용역을 성실히 수행하여야 한다.

(2) “계약상대자”는 본 과업내용서와 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

(3) 본 과업내용에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 판단될 경우 “발주기관”과 상호 협의하여 처리하여야 한다.

나. 착수신고서 제출

“계약상대자”는 계약문서에 정하는 바에 따라 과업을 착수하여야 하며, 관계법령에 정한 서류 및 다음 각호의 사항이 포함된 착수신고서를 “발주기관”에 제출하여야 한다.

(1) 기술용역 예정공정표

(2) 사업책임기술자 선임계 및 이력서

(3) 보안대책 및 각서

(4) 사업책임기술자의 사용인감 또는 서명

(5) 기타 “발주기관”이 지정한 사항

다. 사전검토보고서 및 과업수행계획서 제출

(1) 사전검토보고서 : 계약상대자는 당해 시설물의 설계도서등 유지관리 자료와 과업내용서 등이 법령 및 지침, 본 세부지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역 착수일로부터 10일이내에 “발주기관”에 서면으로 보고 후 승인을 받아 과업을 진행하여야 한다.

① 사전검토의 주요내용은 다음과 같다

- 대상시설물의 정밀안전진단 실시범위

- 유지관리 자료 보유현황

② 과업의 범위

- 기본과업 항목, 선택과업 항목

③ 기본과업 재료시험 수량

④ 기타법령, 지침 및 세부지침과의 부합여부

(2) 과업수행계획서 :“계약상대자”는 사전검토보고서 승인 후 7일이내에 과업

수행계획서를 제출하여야 한다.

① 과업의 목적

② 과업의 개요

- 대상 시설물 현황

- 과업범위

- 과업기간

③ 과업 수행방법

- 조사 및 시험ㆍ측정

- 상태 평가

- 안전성 평가

- 종합평가

④ 보수ㆍ보강 및 유지관리 방안

⑤ 조사ㆍ시험관련 점검측정장비

⑥ 과업수행 일정

⑦ 과업수행 조직

- 과업수행 조직체계

- 인원투입 계획

⑧ 안전관리 계획

⑨ 사전검토 보고서 내용

※ 설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서의 일체 서류는 안전점검 및

정밀안전진단 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

라. 업무협의 및 공정보고

(1) 과업수행자는 본 과업 착수 후 수행일정계획에 따라 아래사항이 포함된 공정보고서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을 별도로 보고하여야 한다.

① 과업 추진내용 및 공정 현황

② 투입 인원 및 장비 현황

③ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

④ 다음주(월) 과업수행계획

(2) 주간 공정보고

과업수행자는 과업 착수와 동시에 주간의 작업상황 등이 포함된 주간공정을 작성하여 매주 월요일까지 제출하여야 한다.

(3) 월간 공정보고

과업수행자는 매월 5일 전달의 인원투입실적 및 그달의 인원투입계획, 전달 추진실적 및 그달의 예정공정 등을 작성․제출하여야 한다.

(4) 단계별 보고

과업수행자는 용역 진행 단계별로 발주부서에 다음과 같이 보고를 한다.

① 중간보고회 : 현장조사 완료 시점(발주기관 요구 시 수시 실시)

② 최종보고회 : 준공 20일 전

6. 계약상대자의 책임한계

가. “계약상대자”는 본 과업수행 전반에 대한 모든 책임을 진다.

나. 본 과업의 부분성과 및 최종성과의 내용의 미비, 과오, 기술상의 오류 등의 결함에 대한“계약상대자”의 책임이 면제될 수 없으며, “계약상대자”이외 제3자에 의해  작성된 각종 도서가 용역성과에 첨부자료로 사용된 경우도 “계약상대자”의 책임한계는 동일하다.

다. 본 과업수행에 따른 안전관리 및 교통정리 등의 미흡으로 발생되는 모든 민, 형사상의 책임은 “계약상대자”가 진다.

라. “계약상대자”가 제출한 과업 성과상 하자로 시비손실 또는 인명피해, 기타 공사진행상 지장을 초래하였을 때에는 원인자 전액부담으로 원인을 파악하여 보완 제시해야 하며“발주기관”이 결정하는 책임범위에 대하여는 과업의 재이행 및 모든 손해 배상을 해야 한다.

마. “계약상대자”는 과업의 안전관리계획을 제출해야하며, 본 과업수행 미흡으로   발생되는 모든 민․형사상 책임은“계약상대자”가 진다.

7. 관련기관 협의 및 인․허가

본 과업 수행 시 교통통제는 교통관련 기관과 협의 후 “발주기관”에 승인을 득한 후, 교통관련 규정에 적합한 안내간판 및 교통유도시설 등을 설치하고, 교통정리원을 배치한 후 과업을 수행하여야 한다.

(1) 교통통제 시간 및 기간

(2) 교통소통대책(차선운영, 작업장점용, 우회도로 등) 에 관한 사항

(3) 교통정리원 배치계획(인원 및 위치 표시)

(4) 교통통제 전방 각종 안내판 설치 계획 등

8. 보안 및 비밀유지

가. “계약상대자”는 과업기간 중 모든 과업에 대한 보안책임이 있으며, 보안규정을 준수하여야 한다.

나. “계약상대자”는 보안대책을 수립하고 대표자와 모든 참여기술자의 보안각서를  착수계 제출 시 “발주기관”에 제출하여야 한다.

다. 성과품은 “발주기관”의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

라. 과업수행 시 발생한 폐기물은 소각 처리하여야 하며, 작업용 보안사진은 용역감독자 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

마. 기타 규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은“계약상대자”가 진다.

9. 과업수행자의 교체 및 책임기술자 자격

가. 과업수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 “계약상대자”가 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는“발주기관”의 사전동의를 받아야하고“발주기관”이 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서는 발주청의 요구에 의거, 즉시 교체하여야 하며, 본 과업수행에 참여하는 기술자 투입지연에 따른 모든 책임은“계약상대자”에게 있다.

나. 본 과업의 사업책임기술자는 시특법시행령 제7조의 별표2에 기술자격자로서 시특법규칙 제4조에 따른 교육기관에서 해당분야의 안전점검 및 정밀안전진단 교육과정을 이수한 사람으로 하여금 안전점검을 실시하도록 하여야 한다.

10. 과업수행시 준수사항

가. 본 과업은 예정공정에 맞추어 계약기간 내에 착오 없이 수행되어야 한다. 다만, 불가항력적인 사유 및 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우, “발주기관”의 승인을 얻어 과업기간을 연기 또는 단축할 수 있다.

나. 본 과업에 명시되지 않은 사항이나 과업수행 중 과업내용 및 정책 등의 변경이 불가피한 경우와 내용해석에 의견차가 있을 경우에는 상호 협의․조정하여 처리하며 협의가 성립되지 않을 경우에는 기술용역계약일반조건 제37조 제2항에 따른다.

다. 본 과업중 결함 원인이 공사후 하자기간 내에 결함은 시설물 부위별로 하자발생 내용 및 범위를 별도 작성․제출하여 하자 만료전 보수에 차질이 없도록 하여야 한다.

11. 안전점검 실시결과 평가

가. 과업수행 결과는 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조의4의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과에 대한 평가규정(국토교통부 고시 제2013-553호, ‘09. 08. 24. 개정)에 의거 평가 의뢰 한다.

나. 본 과업 평가의뢰는 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과에 대한 평가규정에 의거 평가 업무를 위탁받은 기관에서 실시한다.

다. 평가대상은 다음 각 호와 같다.

(1) 안전점검을 성실하게 실시하지 아니하여 시설물에 영 제12조제1항 및 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제13조에서 정한 중대한 결함 또는 손괴가 발생되었거나 발생될 우려가 있다고 인정되는 경우.

(2) 안전점검 결과가 사회적으로 물의를 야기할 우려가 있다고 인정되는 경우.

(3) 안전점검 결과 안전등급이 D등급 이하인 경우.

(4) 정밀안전진단을 실시한 결과 안전등급이 C등급인 경우

제2장 과업수행

1. 계획수립

가. 안전점검을 수행하는데 필요한 인원, 진단측정장비 및 기기의 결정

나. 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 안전점검․정밀안전진단 자료의 검토

다. 안전점검 실시 기간과 소요 작업시간의 예측

라. 타 기관 또는 주민과의 협조관계

마. 선택과업에 대한 조사범위, 장비 및 인력 동원계획

바. 비파괴 시험을 포함한 기타 재료시험의 실시 위치 및 시험 실시계획

사. 붕괴유발부재, 피로취약부위 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재․부위

아. 시설물의 기초와 주위 지반에 대한 조사방법, 조사항목 및 범위

2. 장비의 선정

시설물의 안전점검 및 정밀안전진단에 사용하는 장비는 접근에 필요한 장비와 실제 조사, 시험 및 측정을 수행하는데 사용되는 진단측정장비를 말한다.

안전점검을 실시하는 사람은 구조부재에 접근할 필요가 있으며, 이 경우 가장 편리하고 안전한 장비를 선정하여야 한다.

안전점검 방법과 진단장비의 선정에 있어 책임기술자는 사전에 현장조사를 하여야 하며 도면이 있는 경우는 도면을 가지고 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부 사항들에 대하여 가장 알맞은 장비가 선정되도록 하여야 한다.

3. 안전관리

가. 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단 측정 장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.

나. 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면 보호 장비 등을 포함한 개인용 보호 장구를 항시 착용하여야 하며 진단 측정 장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

다. 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

라. 공공의 안전측면에서 관리주체는 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.

4. 과업의 구분

가. 기본과업

기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다.

기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.

(1) 자료 수집 및 분석

∘ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리․수문계산서

∘ 시공․보수․보강도면, 제작 및 작업도면

∘ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료

∘ 시설물관리대장

∘ 기존 안전점검․정밀안전진단 실시결과

∘ 보수․보강이력

2) 현장조사 및 시험

∘ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성

- 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등

- 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등

∘ 간단한 현장 재료시험 등

- 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)

- 콘크리트 탄산화 깊이 측정

3) 상태평가

∘ 외관조사 결과 분석

∘ 현장 재료시험 결과 분석

∘ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가

∘ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)

4) 보수·보강방안 및 유지관리 방안 제시

5) 보고서 작성

∘ CAD 도면 작성 등 보고서 작성

5. 사전조사

가. 설계도서 등 관련서류 사전검토

정밀안전진단용역을 수주하여 실시하는 사람은 당해 시설물의 설계도서 등 유지 관리 자료와 과업지시서 등이 법령 및 본 지침, 세부지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역 착수일로부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

다만, 용역업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.

나. 과업수행계획서 작성

설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업 수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

다. 서류 관리

설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀점검 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

6. 현장조사

현장조사는 기존시설물에 관한 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 구조물의 상태변화(결함, 손상, 열화 등) 및 균열 폭과 길이 등 구성재료의 변화를 추적하기 위하여 수행한다.

시설물 현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하게 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 수 있는 정도로 하여야 한다.

7. 재료시험

가. 일반

시설물의 상태 평가 및 안전성 평가를 적절히 수행하기 위하여 안전점검의 목적에 부합하는 현장 재료시험 및 실내시험을 실시하여야 하며 이를 위해 사전 현장조사, 도면 및 이전의 점검․진단보고서 검토 등을 통하여 필요한 시험항목 및 시험횟수를 산정하여야 한다.

안전점검 및 정밀안전진단을 실시함에 있어 시설물별로 필요한 재료시험의 최소시험 항목과 기준수량은 세부지침을 따르며, 시설물의 특성과 안전점검 및 정밀안전진단의 목적에 따라 이를 조정할 경우에는 실시결과 보고서에 그 사유를 명시하여야 한다.

나. 현장 재료시험

현장 재료시험은 시설물이 위치하는 현장에서 구조물에 손상을 입히지 않고 강도 및 결함 등을 측정하는 것으로 이에 대한 세부사항은 세부지침에 따른다.

재료시험방법은 구조물의 특성을 간접적으로 측정하는 시험방법으로 시험장비 및 측정방법의 특징, 적용한계 등을 고려하여 측정하여야 하며, 시험을 실시하는 자는 시험장비의 사용법을 숙지한 충분한 경험을 갖춘 자이어야 하며 검․교정을 필한 장비를 사용하여야 한다.

8. 중대한 위험이 예견되는 결함

안전점검 및 정밀안전진단 기간 동안 공중에 중대한 위험을 끼칠 우려가 있는 구조물의 결함이 발견되는 경우에는 즉시 발주기관에 통보하여야 한다.

9. 시설물의 상태평가 방법

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상태변화를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검․정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

10. 시설물의 안전등급 지정

책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다.

다만 정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수․보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

11. 보수․보강 방법

가. 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수・보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

나. 보수․보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

바. 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

현재 외형적으로 손상이 없더라도 차손이 예상되는 구간에 대해서는 예방적 차원의 보수대책을 제시하여야 한다

제3장 성과품 제출

1. 보고서 작성 방법

정밀안전진단 및 정밀점검 실시결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성․제출하여야 하며, 세부적인 작성 방법은 세부지침에서 규정한다.

가. 보고서에 포함되어야 할 사항

(1) 서두

보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문(정밀점검을 실시한 기관의 장)

∘ 정밀점검 결과표 (안전등급)

∘ 참여 기술진 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

∘ 정밀안전진단 결과 요약문

∘ 보고서 목차

(2) 정밀점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∘ 점검의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 점검의 범위 및 과업내용

∘ 사용 장비 및 기기 현황

∘ 점검 수행일정

(3) 자료수집 및 분석

정밀점검의 관련 자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.

∘ 설계도면, 구조계산서

∘ 기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과

∘ 보수․보강이력

∘ 시설물의 내진설계 여부 확인

∘ 기타 관련자료

(4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

∘ 전체 시설물의 외관조사 결과분석

∘ 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

∘ 재료시험 및 측정 결과분석

(5) 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 상태평가 결과를 작성한다.

∘ 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

∘ 안전등급 지정

(6) 시설물의 안전성 평가

안전점검 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 시행방법을 검토

(7) 종합결론 및 건의

∘ 정밀점검 실시결과의 종합결론

∘ 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

∘ 유지 관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

∘ 기타 필요한 사항

(8) 부록

∘ 과업지시서

∘ 외관조사망도

∘ 측정, 시험 성과표

∘ 상태평가 결과 자료

∘ 시설물관리대장 사본

∘ 현황조사 및 외관조사 사진첩

∘ 사용장비 및 기기의 사진

∘ 사전조사 자료 일체

2. 성과품 제출 목록

- 성과품 제출 목록(시설물별)

성과품종류	내 용	수 량		비고
		책자 및 도면	CD보고서
종합보고서 (정밀점검 보고서)	․ 요약보고서 ․ 본보고서 ․ 외관조사망도	5부	5SET	CD는 e-보고서 포함
사진첩	․ 주요 손상현황 ․ 주요과업수행현황	5부	-	-
기타 발주처가 요구하는 자료	-	1식	-	보고용 각종 검토서, 보고요약철 및 현황도면 등

예 정 공 정 표

과업기간 공 종	착수 20일			착수 40일			착수 60일				비 고
	10	10		10	10		10		10
․과업착수준비
1. 관련 자료수집 및 답사 ․사례수집 및 분석 ․관계도서 수집 및 분석 ․보수‧보강자료 수집 및 분석 ․현장조사 계획수립											- 착수 - 현장조사 계획
2. 시설물의 상태조사, 평가 ․외관조사 ․강재 및 Con'c 비파괴시험 ․조사결과 정리											-현장조사
3. 보수․보강제시 및 중간보고 ․보수․보강방안 제시 ․유지관리방안 제시 ․관리주체 협의 및 자문											- 중간보고
4. 보고서 작성 ․최종보고서 작성 ․준공											- 준공
공 정 률	33			34			33