속초시 고시 제2011-19호

속초시 수도정비기본계획(변경) 고시

1. 수도법 제4조제3항에 의거 환경부로부터 승인된 속초시 수도정비기본계획(변경)에 대하여 같은법 제4조제5항에 따라 아래와 같이 승인사항을 고시합니다.

2. 관계도서는 속초시 상수도사업소(033-633-6313)에 비치하고 있으며 일반인에게 열람하고 있습니다.

2011.  4. 11.

속   초   시   장

□ 고시 주요사항

가. 수도정비에 관한 기본방침

나. 속초시 장래 용수수급전망에 관한 사항

다. 급수구역에 관한 사항

라. 수도시설의 규모 및 공급능력에 관한 사항

마. 시설개량계획 및 시설폐지계획에 관한 사항

바. 대체수원 개발계획에 관한 사항

사. 수질관리계획에 관한 사항

아. 상수도 수요관리계획에 관한 사항

자. 운영관리계획에 관한 사항

차. 기술진단 및 관망진단계획에 관한 사항

카. 재해대책에 관한 사항

타. 사업시행계획 수립

가. 수도정비에 관한 기본방침

상수도 공급능력과 수급능력에 대한 수돗물의 중장기 수급의 체계적이고 계획적인 재정비를 통한 합리적인 수도정비 기본계획을 변경 수립하여, 맑은물의 안정적인 공급과 장래 급수사용량 증가에 능동적으로 대처하고 양질의 수돗물을 경제적이고 안정적으로 공급하기 위하여 수도의 과학화, 공중위생의 향상과 더불어 생활환경의 개선으로 수질개선 효과를 극대화 할 수 있도록 계획함.

1) 계획의 범위

∙계획최종목표년도 : 2025년

∙단계별 목표연도

구 분	목 표 년 도	사 업 기 간	비 고
1 단 계	2010년	2007~2010년
2 단 계	2015년	2011~2015년
3 단 계	2020년	2016년~2020년
4 단 계	2025년	2021년~2025년

∙계획구역 : 속초시 행정구역(105.25km²)

2) 안정적인 용수 공급시설의 지속적 확충 및 개량

3) 시민이 신뢰할 수 있는 맑고 깨끗한 물 생산

4) 21C 물 부족 시대에 대비한 물 절약형 사회 정착

5) 경영체계 개선 및 운영효율 향상으로 수도사업의 경쟁력 강화

나. 속초시 장래 용수수급전망에 관한 사항

구 분			금회수도정비 기본계획				비 고
			2010년	2015년	2020년	2025년
계획인구(인)			84,000	83,900	81,900	78,500
급수보급률(%)			99.5	100.0	100.0	100.0
급수인구(인)			83,576	83,900	81,900	78,500
소비량원단위(Lpcd)			292	296	299	299
	동지역(대포동제외)		288	291	293	294
	대포동		382	402	419	434
유수율(%)			72.0	80.0	85.0	85.0
급수량원단위(Lpcd)			406	371	352	352
	동지역(대포동제외)		400	365	345	345
	대포동		530	510	510	510
첨두부하율			1.35	1.35	1.35	1.35
일최대용수수요량(㎥/일)			47,230	46,095	42,895	41,275
		생활용수	45,795	42,110	38,910	37,290
		공업용수	735	735	735	735
		관광용수	700	3,250	3,250	3,250
정수시설용량(㎥/일)			52,000	52,000	52,000	52,000
		속초정수장	40,000	40,000	40,000	40,000
		학사평정수장	8,000	8,000	8,000	8,000
		설악정수장	4,000	4,000	4,000	4,000

다. 급수구역에 관한 사항

∙ 급수구역 분할에 따른 계획인구 및 용수수요량

급수 구역	급수 분구	급 수 지 역		계획인구(인)				용수수요량(㎥/일)
				2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025
계				84,000	83,900	81,900	78,500	47,230	46,095	42,895	41,275
중앙	중앙	계		67,411	66,149	65,629	63,027	37,945	36,367	34,304	33,081
			영랑동	6,101	5,699	5,232	4,973	3,299	2,811	2,432	2,313
			동명동	4,320	4,794	4,431	4,244	2,335	2,361	2,061	1,973
			금호동	8,671	8,152	7,492	7,155	4,682	4,019	3,485	3,327
			교동	11,876	6,989	6,355	6,033	6,410	3,445	2,956	2,805
			노학동	9,997	12,736	13,668	13,223	5,401	6,278	6,357	6,152
			조양동	20,372	22,063	23,184	22,393	10,871	10,877	10,781	10,413
			청호동	4,730	4,420	4,025	3,819	2,552	2,178	1,872	1,775
			대포동	1,344	1,296	1,242	1,187	2,395	4,398	4,360	4,323
학사평	학사평	계		13,966	15,219	13,847	13,157	7,542	7,983	6,921	6,598
			영랑동	165	154	140	133	89	76	65	62
			교동	687	4,739	4,312	4,098	371	2,338	2,006	1,905
			노학동	13,114	10,326	9,395	8,926	7,082	5,569	4,850	4,631
설악	계			2,623	2,532	2,424	2,316	1,743	1,745	1,670	1,596
	설악		소계	2,623	1,023	980	937	1,743	705	675	646
			대포동	381	-	-	-	272	-	-	-
			도문동	1,066	-	-	-	629	-	-	-
			설악동	1,176	1,023	980	937	842	705	675	646
	도문		소계	-	1,509	1,444	1,379	-	1,040	995	950
			대포동	-	368	352	336	-	254	243	232
			도문동	-	1,028	984	940	-	708	678	647
			설악동	-	113	108	103	-	78	74	71

라. 수도시설의 규모 및 공급능력에 관한 사항

1) 배수관로 확장계획

(단위 : m)

급수구역	계	D80	D100	D150	D200	D250	D300	D400	D500	D600
계	25,498	2,729	8,119	6,857	5,193	1,337	970	96	-	189
중 앙	13,177	620	6,919	2,743	1,017	1,119	759	-	-	-
학 사 평	4,712	2,109	1,200	1,191	-	-	211	-	-	-
설 악	5,322	-	-	2,873	2,449	-	-	-	-	-
배수본관	2,287	-	-	50	1,726	218	-	96	-	189

주) 목표연도 : 2015년

3) 배수지 증설 및 신설계획

(단위 : m³)

구 분			배수지명	배수지용량(m³)					비 고
				2006년	2010년	2015년	2020년	2025년
계				25,200	25,200	25,800	25,800	25,800
	중앙급수구역		속초	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	학사평급수구역		학사평	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	설악급수구역			1,200	1,200	1,800	1,800	1,800
		설악급수분구	설악	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
		도문급수분구	도문	-	-	600	600	600	2단계신설

3) 배수가압장 신설계획

∙ 도문가압장 신설

- 시설용량 : Q=940㎥/일×H35m

- 목표년도 : 2010년

마. 시설개량계획 및 시설폐지계획에 관한 사항

1) 상수도시설 개량계획

구 분	시 설 용 량(m³/일)	시 설 개 량	비 고
속초정수장계통	40,000	1식
학사평정수장계통	8,000	1식
설악정수장계통	4,000	1식
송․배수시설	-	1식

2) 마을상수도 정비 및 상수도 전환계획

(단위 : 개소)

구 분	계	2010년	2015년	2020년	2025년	비고
지방 전환	5	5	-	-	-

3) 시설폐지 계획

구 분	시 설 용 량(m³/일)					비 고
	2006년	2010년	2015년	2020년	2025년
가마소정수장	5,000	-	-	-	-	승인후 폐지
노학양수장	4,000	-	-	-	-
노학암반관정	3,000	-	-	-	-

∙폐지사유

- 장기간 운휴와 기술진단 결과를 고려시 전면 시설개량 불가피

- 취수원의 장기적인 수질보전이 어려움

4) 관망 블록화 계획

대블록	중블록	소블록
3개소	4개소	43개소
중앙	중앙	JA1～JA24
학사평	학사평	HS1～HS11
설악	설악	SA1～SA3
	도문	DM1～DM5

바. 대체수원 개발계획에 관한 사항

∙ 고성군에서 Q=8,000m3/일의 정수수수 계획수립

- 속초시는 갈수기시 쌍천의 원수부족현상에 의하여 대체수원개발이 시급한 실정으로

- 인근 지자체의 수원개발과 연관하여 고성군 통합정수장(Q=25,500m3/일)에서 Q=8,000m3/일의 정수수수 계획수립

사. 수질관리계획에 관한 사항

1) 상수원수 수질관리계획 수립

2) 정수 수질관리계획 수립

3) 송∙배수 수질관리계획 수립

4) 저수조 수질관리계획 수립

아. 상수도 수요관리계획에 관한 사항

1) 유수율 제고계획 수립 ⇒ 목표유수율 : 85% (2025년)

2) 중수도 보급계획 수립

3) 절수기기 보급계획 수립

4) 빗물 이용시설 설치계획 수립

5) 하수처리수 재이용 계획 수립

자. 운영관리계획에 관한 사항

1) 수도사업 경영체계 개선계획 수립

2) 민간위탁 계획 수립

3) 수도기술연구 및 개발계획 수립

4) 교육훈련계획 수립

5) 상수도 정보화계획 수립

6) 수도관리기구 정비계획 수립

차. 기술진단 및 관망진단계획에 관한 사항

1) 기술진단계획 수립

2) 관망진단계획 수립

카. 재해대책에 관한 사항

1) 수질사고대책 수립

2) 비상급수대책 수립

3) 수도시설 지진대책 수립

4) 동절기 대책 수립

5) 염소가스 누출대책 수립

6) 기타 안전관리 대책 수립

타. 사업시행계획 수립

(단위 : 백만원)

구 분	계	1 단계 (2008～2010년)	2 단계 (2011～2015년)	3단계 (2016년~2020년)	4단계 (2021년~2025년)
총 계	39,890	6,019	19,827	7,344	6,700
1. 시설확충계획	7,443	1,460	5,983	-	-
2. 시설개량계획	27,805	3,762	11,753	6,585	5,705
3. 유지관리계획	4,642	797	2,091	759	995