정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업
② 추진배경	청초호유원지 북측 내 노후된 시설을 철거하고 안전하고 창의적인 속초시 제1호 물놀이터를 조성하여 쾌적하고 편안한 가족형 쉼터 제공하고자 함.
③ 사업개요	○ 총사업비 : 1,400백만원(도비 250, 시비 1,150) ○ 사 업 량 : 물놀이터 설치 1개소 및 광장 정비 1식 ○ 사업면적 : 3,141㎡
④ 사업부서	미래도시국 공원녹지과		⑤ 담당자	녹지7급 이상민 시설5급 원철호
⑥ 선정기준	기타		⑦ 사업기간	2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 실시설계용역 준공		‘23.04.01	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 일상감사 요청(청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업)		‘23.04.03	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 계약심사 요청(청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업)		‘23.04.07	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 계획		‘23.04.19	이병선 시장 김성림 부시장 이선규 미래도시국장 원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 시행결의		‘23.04.19	이병선 시장 김성림 부시장 이선규 미래도시국장 원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(전기공사) 시행결의		‘23.04.19	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(폐기물처리용역) 시행결의		‘23.04.19	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 재해예방 기술지도 용역 시행결의		‘23.04.19	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 착공		‘23.05.08	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(폐기물처리용역) 착수		‘23.05.08	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 재해예방 기술지도 용역 착수		‘23.05.08	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(전기공사) 착공		‘23.05.09	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(폐기물처리용역) 일시 중지		‘23.06.02	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(폐기물처리용역) 준공		‘23.06.26	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 현장여건 변동사항 검토보고		‘23.07.17	이병선 시장 김성림 부시장 이선규 미래도시국장 원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 변경 시행결의		‘23.07.19	이병선 시장 김성림 부시장 이선규 미래도시국장 원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 재해예방 기술지도 용역 준공		‘23.07.29	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업(전기공사) 준공		‘23.07.29	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관
○ 청초호유원지 물놀이터 및 광장 정비사업 준공		‘23.07.29	원철호 공원녹지과장 이우진 공원관리팀장 이상민 주무관