■ 소하천정비법 시행규칙 [별지 제8호서식] <개정 2012.3.5>
소하천정비시행계획의 공고
속초시 공고 제2012-267호 「소하천정비법」 제8조제2항 및 같은 법 시행규칙 제6조에 따라 2012년도 소하천정비시행계획을 다음과 같이 공고합니다. 2012 년 6월 1일 속 초 시 장 (직인)
소하천명	사업 개요										비고
	공사명	공사 위치		사업량(m)			공사기간		공사 목적
		시작하는 지점	끝나는 지점	축제 (築堤)	호안 (護岸)	기타 구조물	착공	준공
장재2천	장재2천 정비사업	설악동 710-1	설악동 808	850	850	소교량 2개소	2012. 05.01	2014. 12.31	재해예방 및 생활환경 개선		토지 및 지장물 `1식
				이	하	여	백
열람서류 1. 실시설계도서 2. 위치도(축척 5만분의 1 지형도) ※ 비고란에는 손실보상 등에 관한 사항을 적는다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

소 하 천 정 비 사 업 계 획 서

1. 소하천공사의 명칭 : 장재2천 정비공사(소하천)

2. 하천공사의 목적 및 개요

가. 본 사업은 설악동 710-1번지 일원의 장재터마을의 장재2천 소하천 정비계획에 따라 정비하여 인근 주택 및 농경지 침수피해 방지로 주민생명과 재산을 보호코자하며 친환경적인 소하천 정비로 농촌생활환경을 개선하는데 그 목적이 있다.

나. 하천공사의 개요

∘ 사업량 : 소하천정비 L=850m, 소교량 2개소

∘ 사업비 : 1,444,000천원(국비 722,000 시비 722,000)

3. 하천공사 시행지역의 위치

∘ 강원도 속초시 설악동 710-1번지 일원(소하천 장재2천)

4. 하천공사 시행자의 명칭 및 주소

∘ 시행자 : 속초시장(건설과장)

∘ 주  소 : 강원도 속초시 중앙로 183(중앙동 469-6)

5. 소하천 공사의 착수 및 준공예정연월일

∘ 2012. 5.  ~ 2014. 12. 31

6. 수용 또는 사용하고자 하는 토지 및 지장물 조서 : 붙임참조

7. 준공된 하천 부속물의 관리에 관한 사항

∘ 관리자 : 속초시장(건설과장)

8. 폐천부지 발생 예상면적 : 해당없음

9. 실시설계도서 : 별첨 설계도서 참조

10. 예정공정표 : 본 사업은 3년차 사업으로 시행한다.

공종	보할 (%)	2012년 (분기별)												2013년 (분기별)												2014년 (분기별)												비고
		1분기			2분기			3분기			4분기			1분기			2분기			3분기			4분기			1분기			2분기			3분기			4분기
설계및 보상 등	16
호안공 축제공	14
소교량	35																																					마을 진입도로
소교량	35																																					마을안 설악동 707-6일원
계	100

11. 사업비 및 자금조달 계획서

(금액:천원)

계	2012년	2013년	2014년	비고
1,444,000	310,000	567,000	567,000	농어촌구조개선 특별회계 국고보조사업

12. 하천공사 편입토지 및 지장물에 대한 보상 계획

가. 편입토지 및 물건조서 열람

∘ 열람기간 : 고시일로부터 14일간

∘ 열람장소 : 속초시 건설과

나. 보상시기 절차 및 방법

∘ 보상시기 : 2012. 5월부터 ~ 2012. 12월까지

∘ 보상절차 및 방법 : 속초시 건설과에서 소유자와 계약 체결 후 지급

∘ 보상가액산정 : 보상가액은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법령에 따라 2인 이상의 감정평가업자가 산정한 가액에 산출평균치

13. 기타사항

기타 공사와 관련된 자세한 내용은 속초시청 건설과 도시개발담당(☎033-639-2536)으로 문의하시기 바랍니다.

수용 또는 사용하고자 하는 토지조서

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소 유 자		비고
						성명	주 소
1	설악동	710-1	대	1,643	93	김주호	경기 화성시 팔탄면 고주골길 53-19
2	〃	709	전	251	6	김명순외1	경기 하남시 수리남로14번길 9-2 대전 서구 둔산남로 30, 107동 404호(둔산동, 녹원아파트)	김명순(8/10) 김근수(2/10)
3	〃	산155-1	임	7,884	715	김종우	서울 강동구 둔촌동 주공아파트 427-1002
4	〃	709-1	전	56	12	김근수외1	대전 서구 둔산남로 30, 107동 404호(둔산동, 녹원아파트)	속초시(8/10)
5	〃	706-2	대	280	33	이금자	서울 강남구 삼성로111길 8, 210동 401호(삼성동 삼성동힐스테이트)
6	〃	706-1	대	804	214	이금자	서울 강남구 삼성로111길 8, 210동 401호(삼성동 삼성동힐스테이트)
7	〃	705-1	잡	119,201	15	주)설악	강원 속초시 설악동 705-1
8	〃	705-14	잡	2,759	114	장치혁	경기 용인시 기흥구 언남로 15, 208동 1104호 (언남동, 하마비마을동일하이빌2차아파트)
9	〃	산155	임	1,289	22	김남일	강원 속초시 장재터마을3길 28, (설악동)
10	〃	산155-3	임	447	165	김종우	서울 강동구 둔촌동 주공아파트 427-1002
11	〃	산154	임	5,210	3	주)설악	강원 속초시 설악동 705-1
12	〃	707-7	대	12	1	김옥경	강원 양양군 강현면 물치천로 260-8
13	〃	707-5	대	320	15	김옥경	강원 양양군 강현면 물치천로 260-8
14	〃	707-6	전	217	217	강명종	강원 속초시 도문동 830-8
15	〃	707-2	전	218	96	김옥경	강원 양양군 강현면 물치천로 260-8
16	〃	707	잡	1,025	41	김옥경	강원 양양군 강현면 물치천로 260-8
17	〃	705-15	잡	1,654	11	장현묵	경기 고양시 덕양구 삼송로 137, (삼송동)
18	〃	705-6	잡	180,544	18	공무원 연금공단	서울 강남구 언주로 508 (역삼동 701번지)
19	〃	산155-4	임	853	127	김종우	서울 강동구 둔촌동 주공아파트 427-1002
20	〃	808	전	5,588	92	노우현	강원 강릉시 화부산로8번길 7, (교동)
21	〃	708	임	413	123	양승규	서울 강남구 논현로26길 36-8, (도곡동)
22	〃	산155-2	임	1,229	134	김종우	서울 강동구 둔촌동 주공아파트 427-1002
23	〃	728-1	전	1,256	23	이경혜	경남 창원시 의창구 창원천로94번길 19, 102동 3203호 (대원동, 더시티세븐 자이)
24	〃	730	전	16,151	71	노우현	강원 강릉시 화부산로8번길 7, (교동)
25	〃	810	답	4,120	14	노우현	강원 강릉시 화부산로8번길 7, (교동)
26	〃	산153-2	임	893	240	김명순외1	경기 하남시 수리남로14번길 9-2 대전 서구 둔산남로 30, 107동 404호(둔산동, 녹원아파트)	김명순(8/10) 김근수(2/10)