정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설악 자연재해위험개선지구(설악교) 정비사업
② 추진배경	설악교 정밀안전진단 “E”등급 판정에 따른 교량 재가설
③ 사업개요	❍ 내 용 : 설악교 재가설 B=12m, L=108m ❍ 사업비 : 6,000백만원(국비 50%, 도비 10%, 시비 40%)
④ 사업부서	도시안전국 건설도시과			⑤ 담당자	시설7급 정희철 시설5급 이충현
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사			⑦ 사업기간	2022년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 정밀안전진단용역 준공(D등급)		‘21.05.10.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 정승원 도로관리담당 박경열 주무관
○ 통행금지 공고 (속초시공고 제2021-556호)		‘21.05.13.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 정승원 도로관리담당 박경열 주무관
○ 정밀안전진단용역 준공(E등급)		‘21.08.27.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 정승원 도로관리담당 박경열 주무관
○ 실시설계용역 착수		‘21.09.27.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 이충현 도로시설담당 김호정 주무관
○ 자연재해위험개선지구 지정 (속초시고시 제2021-114호)		‘21.09.29.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 정승원 도로관리담당 박경열 주무관
○ 교량 특정공법 선정 (속초시공고 제2022-24호)		‘22.01.11.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 이충현 도로시설담당 김호정 주무관
○ 일상감사 완료 및 도 계약심사 의뢰		‘22.04.26.	윤종선 도시안전국장 이대수 건설도시과장 이충현 도로시설팀장 김호정 주무관
○ 사업착공		‘22.06.27.	이대수 건설도시과장 이충현 도로시설팀장 김호정 주무관