정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중계펌프장∼하수처리장 간 하수압송관로 보수공사
② 추진배경	중계펌프장 ~ 하수처리장 간 압송관로가 장기사용 및 부식에 따른 잦은 관로 파열로 도로 침하 등 대형 안전사고 위험이 있어, 압송관로 전 구간 보강을 통하여 원활한 하수압송 및 안전한 도시환경 조성
③ 사업개요	- 총사업비 : 7,094백만 원(국비 3,434 시비 3,660) - 사 업 량 : 총 3,250m(900Φ × 2련 × 1,625m) 중 2,896m 보수
④ 사업부서	하수도사업소		⑤ 담당자	공업7급 홍기수 행정5급 장봉주
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 하수압송관로 기술진단 용역		‘17.5.30.	박만엽 수질환경사업소장 홍희재 하수행정담당(협조) 장창원 하수생활운영담당
○ 국비신청서 제출		‘20.3.5.	조상수 하수도사업소장 서영애 하수행정담당(협조) 최강선 주무관(협조) 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 재원협의서 제출		‘20.7.3.	조상수 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 재원협의 의견 알림 ※ 하수도사업소-9555(2020.8.4.)		‘20.8.10.	김윤희 하수행정담당 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 재원협의 조치계획서 제출		‘20.9.1.	조상수 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 총사업비 변경승인(1회) ※ 하수도사업소-579(2021.1.14.)		‘21.1.15.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관

○ 계약심의위원회 심의 (관급자재 : 강관)	‘21.1.25.	박정숙 하수행정담당 임진우 하수운영담당
○ 추진상황 및 발주계획 보고	‘21.1.26.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 박정숙 하수행정담당(협조) 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 신기술 사용협약 체결 및 협약	‘21.1.29.	박정숙 하수행정담당 최강선 주무관
○ 속초시 일상감사 완료	‘21.2.4.	박정숙 하수행정담당 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 도급공사(1차분) 착공	‘21.5.21.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 하도급계약 사전승인	‘21.6.22.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 총사업비 변경요구 승인(2차) ※ 하수도사업소-11742(2021.9.8.)	‘21.9.10.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 폐기물처리 용역 착수	‘21.10.6.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 최강선 주무관
○ 총사업비 변경요구 승인(3차) ※ 하수도사업소-2101(2022.2.18.)	‘22.2.21.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영담당 안영수 주무관
○ 도급공사(2차분) 착공	‘22.4.22.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영팀장 안영수 주무관
○ 도급공사(1차분) 준공	‘22.5.17.	장학봉 하수도사업소장 임진우 하수운영팀장 안영수 주무관
○ 관급자재(1차분) 납품(강관)	‘22.08.18.	장봉주 하수도사업소장 임진우 하수운영팀장 홍영기 주무관
○ 관급자재(2차분) 납품(강관)	‘22.09.06.	장봉주 하수도사업소장 임진우 하수운영팀장 홍영기 주무관
○ 폐기물처리 용역 준공	‘22.11.24.	장봉주 하수도사업소장 장은영 하수행정팀장(협조) 임진우 하수운영팀장 홍기수 주무관