정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설악항 어촌뉴딜300사업
② 추진배경	낙후된 어촌 필수기반시설 현대화 및 어촌주민의 삶의 질 제고를 통한 지역 활력 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 설악항 일원 ❍ 내 용 - 공통사업 : 방파제 안전보강, 어구창고 시설정비, 물양장 정비, 안전시설 확충 - 특화사업 : 관광안내소 리모델링, 활어회센터 정비, 경관개선, 내물치 쉼터조성 등 - S/W사업 : 지역주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 지역협의체 운영 ❍ 사업비 : 8,000백만원 (국비 5,600, 도비 720, 시비 1,680)
④ 사업부서	경제복지국 해양수산과		⑤ 담당자	해양수산8급 박보경 해양수산5급 이상운
⑥ 선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항		⑦ 사업기간	2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 위·수탁 계약 체결 (수탁자 : 한국어촌어항공단)		‘20.03.25	도시안전국장 김기중 박종완 과장 김수정 팀장 김상유 주무관
○ 2021년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정		‘20.12.09	박종완 과장 김수정 팀장 김제이 주무관
○ 지방재정 투자심사 완료		‘21.03.02	한희수 과장 김수정 팀장 김제이 주무관
○ 기본계획 및 지역역량강화사업 용역 착수		‘21.03.26	한희수 과장 김수정 팀장 김제이 주무관
○‘21년 위탁사업비 지급결의		‘21.06.08	한희수 과장 김수정 팀장 하귀희 주무관
○ 기본계획 협의 및 심의		‘21.08.18 ‘21.09.28	한희수 과장 김수정 팀장 하귀희 주무관

○ 실시설계 용역(토목분야) 착수	‘21.08.04	한희수 과장 김수정 팀장 하귀희 주무관
○ 기본계획 고시	‘21.11.02	한희수 과장 김수정 팀장 하귀희 주무관
○‘22년 위탁사업비 지급결의(1차)	‘22.06.30	김원기 과장 김수정 팀장 하귀희 주무관
○ 실시설계 용역(건축분야) 착수	‘22.09.27	김원기 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○‘22년 위탁사업비 지급결의(2차)	‘22.11.24	김원기 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○ 공사 착공(토목분야)	‘23.03.30	김원기 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○‘23년 위탁사업비 지급결의(1차)	‘23.05.30	김원기 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○ 기본계획 변경 고시	‘23.06.05	김원기 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○‘23년 위탁사업비 지급결의(2차)	‘23.07.19	김원기 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○ 공사 착공(건축분야)	‘23.09.04.	이상운 과장 권나원 팀장 박보경 주무관
○ 시행계획 고시	‘23.09.06.	이상운 과장 권나원 팀장 박보경 주무관